함께 일하는 사회, 함께 열어가는 미래

교육장 리모델링 제안 요청서

2019. 11.

Ⅰ. 사업개요

□ 일반사항

◯ 사 업 명 : (재)함께일하는재단 교육장 리모델링

◯ 사업기간 : 2019.11 ~ 2019.12

◯ 사업예산 : 130,000,000원(부가세 포함)

□ 사업목표

◯ 효율적인 공간 조성과 인테리어 개선을 통하여 쾌적한 교육장 환경 구축

◯ 다양한 행사 운영이 가능한 다목적 공간 조성

◯ 직원들의 휴식 공간 조성

□ 추진일정

세부사업명	기간
입찰공고 및 평가	11.12 ~ 11.20
업체 선정 및 계약	11.22
교육장 구축	11.25 ~ 12.22
점검 및 준공	12.23 ~ 12.31

◯ 세부 추진일정은 사업기간 내 제안업체가 상세 구체화하여 제시하여야 함

◯ 착수보고, 중간보고, 최종보고 반드시 포함하여 제시

◯ 사업기간은 상호 협의에 의해 조정 가능함

Ⅱ. 제안요청 내용

□ 사업개요

◯ 사업명칭 : (재)함께일하는재단 교육장 리모델링

◯ 사업기간 : 계약일로부터 50일

◯ 시공범위 : 1층 주출입구부터 지하 이동 계단과 지하 교육장(도면 참조)

◯ 추진방향

- 편안하고 안정적이고 쾌적한 교육 환경 조성

- 다목적으로 활용 가능한 공간 구성

□ 교육장 구축 요구사항

◯ 1층 주 출입구 및 지하 이동 계단

- 1층 주 출입구와 로비 인테리어 디자인 및 설비

- 계단 중간에는 재단을 상징할 수 있는 싸인물 설치

- 계단 조명 개선

- 우편함 설치(5층 창업팀 입주로 인한 입주업체 리스트 표기 가능)

- 천장 마감 변경

◯ 지하층 로비

- 여성 화장실 칸막이 설치

- 화장실 출입문 디자인 개선

- 엘리베이터 입구 디자인 개선

◯ 교육장 인테리어 및 가구집기

- 현재 설치되어 있는 벽체 철거

- 방송 조정실 철거 후 방송장비 수납장 및 미니바 설치

- 환기시설 흡기 및 배기 파이프 이동

- 현재 조명시설을 개선하여(LED 등으로 교체) 최대 2배 이상 밝기 구현

◯ 물품 세부내역

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	수강생용 책상	3인, 가림판,	40	EA
2	수강생용 의자	틸팅, 좌판 폴딩, 적층 가능	130	EA
3	강의대		1	EA

□ 평면도

◯ 1층 주출입구

◯ 지하 교육장

Ⅲ. 제안[입찰] 참가자격 및 사업자 선정방법

□ 선정 방법

○ 기본방침

- 객관적이고 공정한 기준을 적용하여 경쟁에 의한 우수 사업자 선정

○ 적용규정

- 소정의 기한 내 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조에 근거하여 선정

○ 입찰방식

- 일반 경쟁 입찰(협상에 의한 계약 체결)

○ 선정절차

- 1단계 : 제안서 평가(기술/가격)

· 기술평가(80점) : 5인 내외의 재단 내외부 심사 위원들이 평가 기준에 의거하여 제안서를 평가함

‧ 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

[eqn: 평점`=`입찰가격평가배점한도` TIMES ` LEFT ( ` {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

‧ 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

[eqn: 평점`=`입찰가격평가배점한도` TIMES ` LEFT ( ` {최저입찰가격} over {추정가격의`80%`상당`가격} RIGHT )# +` LEFT [ 2` TIMES ` LEFT ( {추정가격의`80%`상당`가격`-`당해입찰가격} over {추정가격의`80%`상당`가격`-`추정가격의`60%`상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

※ 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

· 가격평가(20점) : 협상에 의한 계약 체결 기준에 명시된 가격 산출 방식에 따름

· 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정(평가 점수 단위를 소수점 둘째 자리까지, 셋째 자리 이하는 절사)

· 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

· 협상순서는 협상적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정함

· 동점 시 기술평가 고득점자가 선순위이며 기술평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 업체가 없을 경우 재공고 실시

· 평가위원 명단 및 기본 평가 항목 외 세부평가기준은 공개하지 않으며 제안서 평가결과에 대하여 제안 업체는 이의를 제기할 수 없음

- 2단계 : 협상 실시(원가 산정 포함)

· 종합점수 1위 업체부터 가격협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략

· 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우에는 동일한 기준과 절차에 따라 후순위 업체와 협상 실시

· 기술협상의 경우, 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행일정 등의 내용에 대해 수정‧보완이 필요할 경우 협상을 통해 내용을 조정함(재단에서 작성한 기술협상 항목들을 협상대상자가 수락하는 형태)

· 가격협상의 경우, 협상대상자가 제안한 가격과 가격협상 이전에 산출한 예정 가격을 비교하여 협상(제안서 제출 시 입찰한 금액이 예정가격 이하일 경우 그 금액으로 협상)

· 협상기간은 협상대상자 선정 통보일로부터 10일 이내로 하되, 협상대상자와 협의에 의해 조정할 수 있음

· 모든 협상대상자와의 협상이 결렬 될 경우, 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- 3단계 : 최종 수행기관 선정

- 4단계 : 계약 체결

□ 평가 항목

항 목		평 가 요 소	배 점
기술평가	계획 부문	- 사업 추진 배경 및 업무 이해도 - 일정계획의 합리성 - 사업 추진 전략의 창의성, 타당성 및 기대 효과	20점
	시공 부문	- 기능 및 성능 표준 요구, 사용자 편의성 충족도 - 개발 절차의 타당성 및 산출물의 적정성 - 디자인 및 공간의 편의성 - 시행 계획 및 운영 방안	30점
	사업수행능력	- 대외인지도, 재무구조의 안정성 - 조직체계 및 참여인력의 적정성 - 최근 2년 간 유사 입찰 수행 능력	20점
	지원 부문	- 유지보수 방안 절차, 범위, 기간 등의 적정성	10점
소 계			80점
가격평가		- 입찰가격 평점산식에 의거하여 평가	20점
합 계			100점

Ⅳ. 제안서 작성 및 제출 안내

□ 제안서 작성 지침

○ 제안서는 A4 세로 방향으로 작성하여 단면으로 인쇄하되, 부득이한 경우 일부에 한하여 A4 가로 방향 작성 또는 기타용지를 사용할 수 있음

○ 제안서는 다음 사항들을 중심으로 기술하여야 함

- 제안 업체가 추진하고자 하는 핵심사항 위주로 작성

- 동 사업을 성공적으로 추진하기 위한 제안 업체의 사업 관리 방안

○ 제안 내용은 꼭 필요한 사항 위주로 작성하며 명료성, 체계성, 가독성을 가지도록 작성하여야 하며「가능하다」,「동의한다」,「가능하다고 본다」,「할 수도 있다」, 「고려하고 있다」등의 표현은 평가에서 불가능한 것으로 간주함

○ 제출된 제안서의 기재 내용은 재단의 요청이 없는 한 수정, 삭제 또는 대체할 수 없음

○ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 밝혀지거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 일체의 손해 배상 등의 책임을 져야 함

○ 별지는 필히 지정된 양식을 준수하여 작성해야 함

제안서 목차(예시)

Ⅰ. 제안개요

1. 사업목표 및 범위

2. 제안 내용의 특징과 차별성

: 유사 프로젝트 수행 경험 및 차별화 제안 요소 등 기술

Ⅱ. 공사 수행 부문

1. 공사 수행 인력 체계

: 성공적인 공사를 위해 조직 구성 및 인력 운영 등

2. 공사 수행 방안

: 주요 공사 계획, 구체적인 방법 기술

Ⅲ. 공사 관리 부문

: 구체적인 일정 계획과 사업 관리 방안 포함

※ 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서에는 구체적인 사업 수행 내용 및 결과를 제시해야 함

- 제안서의 목차는 변경, 추가할 수 있음

□ 제안서 효력

○ 제안서는 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

○ 제안서 및 계약서에 대해 해석상 이견이 발생할 경우 쌍방이 협의하여 조정함

○ 제안서의 내용이 향후 사업 추진 시 반드시 필요하다고 인정될 경우 재단의 요청에 의해 수정될 수 있음

서 식 번 호	서 식 명
별지 제1호 서식	입찰참가신청서
별지 제2호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제3호 서식	재무현황(최근 2년간)
별지 제4호 서식	과업수행 조직도
별지 제5호 서식	참여 인력 현황 총괄표
별지 제6호 서식	관련분야 입찰 수행 실적 총괄표
별지 제7호 서식	사업 실적 증명서
별지 제8호 서식	가격제안서(견적서 별첨)
별지 제9호 서식	개인정보 수집/이용 및 제공 동의서

□ 별지 서식

【별지 제1호 서식】

입찰참가신청서
신청인	상호 또는 법인명			법인등록번호	-
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호	-
입찰개요	입 찰 일 자	2019년 월 일
	입 찰 건 명	(재)함께일하는재단 교육장 리모델링
입찰금액	제안견적금액
대 리 인․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 귀 재단에서 집행하는 위의 입찰에 참가하고자 귀 재단에서 정한 입찰 공고사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 1. 기타 공고로써 정한 서류. 끝. 신 청 인 (인) (재)함께일하는재단 귀하

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사업분야		사업자번호
주 소
전화번호		FAX
회사설립년도	년 월
해당부문종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

【별지 제3호 서식】

재무현황(최근 2년간)

회 사 명	(대표자 : )
구 분	연 도 별 (단위: 원)		비 고
	2017년	2018년
1. 총 자 산
2. 자 기 자 본
3. 유 동 부 채
4. 고 정 부 채
5. 유 동 자 산
6. 당 기 순 이 익
7. 부문별 매출액
			매출액 계
8. 자기자본비율
9. 자기자본순이익율
10. 유 동 비 율

【별지 제4호 서식】

과업수행 조직도

			사업책임자
( ) 부문		( ) 부문		( ) 부문		( ) 부문

【별지 제5호 서식】

참여 인력 현황 총괄표

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

- 본 제안에 투입할 전체 인력에 대하여 기재(채용 예정 인력 포함)

【별지 제6호 서식】

관련분야 입찰 수행(준공) 실적 총괄표

순번	용 역 명	발주기관	입찰기간	계약금액 (천원)	수행역할	입찰기관

(참고)	1. 최근 연도순으로 기재하되 공고일 기준 최근 3년간 실적

2. 사업(준공) 실적 증명서 첨부

【별지 제7호 서식】

사업 실적 증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전 화 번 호
	사업자번호
	증명서용도	입찰참가신청용
	제 출 처
계약 및 용역 내용	계 약 명
	계 약 번 호	계 약 일 자	금 액			발 주 처
증명발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기 관 명	(인)		전 화 번 호
	주 소			팩 스 번 호
	발급부서			담 당 자

※ 주 1) 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 함

2) 공동도급으로 이행한 경우에는 지분율과 이행실적(금액, 규모 등)을 기재하여야 함

【별지 제8호 서식】

가 격 제 안 서

사 업 명

주관기관

사업기간

제안금액

일금                          원 (￦                        )

구 분		금 액	비 고
합 계
제 안 금 액			부가세 포함

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

붙임: 견적서

2019년  11월    일

입 찰 자                            (인)

(재)함께일하는재단 귀하

【별지 제9호 서식】

개인정보 수집/이용 및 제공 동의서

함께일하는재단 홈페이지 구축 제안서 작성에 필요한 개인정보에 대한 수집․이용에 대한 내용을 관렵 법령에 따라 고지하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

1. 수집/이용 목적

ㅇ 본 사업과 관련된  제안서 평가를 위해 수집된 개인정보는 본 사업목적 이외의 다른 목적으로 사용되지 않습니다.

2. 수집/이용 항목

ㅇ 성명, 직책, 연령, 경력, 자격 사항 등 참여 이력사항 일체

3. 이용/보유 기간

ㅇ 제안서 평가 후 기록물보존 기간 동안 보관

본인은 위의 1,2,3의 내용을 확인하였으며, 위와 같이 개인정보의 수집/이용 및 제공에 대하여 동의합니다.

회사명	성명	직책	서명

대표자 :                (인)

(재)함께일하는재단 귀하