이마트-(재)함께일하는재단

「노브랜드 상생스토어 공공 공간 환경개선 사업」

과업지시서

2021. 10.

Ⅰ		과업 개요

1. 과업개요

1) 과 업 명 : 가평잣고을시장점 노브랜드상생스토어 공공공간 환경개선

2) 사업기간 : 착수일로부터 15일

3) 사업금액 : 금 200,000,000원 내(부가가치세 및 일체비용 포함)

2. 과업 배경 및 목적

1) 전통시장의 지역상권과 연계하여 창의적인 컨셉을 통한 콘텐츠 제공

2) 지역 니즈를 반영한 노브랜드 상생스토어로서의 공간 연출

3) 전통시장이라는 장소의 특징을 고려한 공간개선

4) 노브랜드 상생스토어 내․외부사인 및 휴게공간 제안

3. 과업의 범위

1) 세부 과업 내용

건물 전면 파사드 디자인 제작 및 설치

내부 사인 디자인 제작 및 설치

거리 환경 개선 광고물 디자인 제작 및 설치

그 외 공공공간 제안 및 설치

2) 사업 대상지 현황

사업 대상지 구간 : 경기도 가평군 가평읍 읍내리 405 일대

면적 : 약 1000㎡ 내

위치도 및 현황

※ 상기 세부 과업은 상황에 따라 변동 가능

위 치 도 : 가평잣고을시장 창업경제타운 일대 내․외부
현 황

4. 과업 수행기간 및 추진 일정

1) 착수일로부터 15일 이내

‣ 계약 관련 : 계약체결일로부터 7일 이내에 착수계 등 제반서류를 제출

2) 추진 일정

디자인 시안 (제안서 및 기술 협상)	▶	디자인 협의	▶	최종시안 확정	▶	제작 및 설치	▶	보완 요구	▶	완료

※ 기간 및 일정은 상황에 따라 변동 가능

5. 과업수행지침

1) 과업은 계약체결 후 7일 이내에 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 과업수행계획서(공정예정표, 과업수행조직, 공사중 비상연락망, 안전관리계획 포함), 시방서(유사한 성격의 계획서) 등 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

2) 과업수행자는 유사 사업 경력이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업으로 추진될 수 있도록 하여야 한다.

3) 본 과업수행에 있어 디자인 시안 변경 과정에서는 함께일하는재단의 의견을 충분히 수렴하여 반영하여야 하며 세부추진일정 등에 대하여 긴밀히 협의한 후, 수행하여야 한다.

4) 과업 진행에 따른 착수 ․ 최종보고 또는 필요에 의한 수시 보고는 함께일하는재단과 사전협의하여 개최토록 한다.

5) 과업의 완성은 수급자가 제출한 최종 성과품을 함께일하는재단에서 최종 준공 승인함으로써 완료된다.

6) 제안요청서나 과업지시서, 협상내용 및 계약조건 등 규정에 명시되지  아니한 사항은 함께일하는재단의 결정에 따른다.

7) 건축법 및 가평시조례, 옥외광고물법 등 공사관련 법규를 준수하여, 과업을 수행하여야 한다.

8) 모든 공사는 산업안전보건법에 따라 진행하여야 하며, 과업수행자가 안전관련법률의 미이행에 따른 낙상, 추락등 산업재해 발생시 모든 피해사항에 대해 책임을 진다. 과업수행자는 당 공사에 대한 산재보험이 가입되어 있어야 하며, 공사비 내역의 경우, 총공사비내에 안전관리비를 포함하여야 한다.

9) 준공검사시, 공사품질 미달(미시공분, 규격미달, 오손 및 훼손, 컨텐츠 오기, 설치품질미달 등)에 대한 보완 및 보수요청시 이에 대해 과업수행자는 적극적으로 조치하여야 한다.

Ⅱ		과업수행 일반사항

가. 과업수행자의 의무

1) 과업수행자는 본 과업지시서 내용에서 정하는 바에 따라 과업 내용을 신의와 성실의 원칙에 입각하여 수행하고 정해진 기간 내에 완성하여야 한다.

2) 과업수행자는 발주기관의 요구가 있을시 수시보고를 하여야 한다.

3) 과업수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 과업에 착수하여야 한다.

4) 과업수행자는 수행중인 과업의 중요내용에 대하여 발주기관의 사전 의사 결정이 필요한 때에는 발주기관에 그 필요성을 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

5) 용역 수행 중 설계변경사항 발생 시 과업수행자는 즉시 발주기관에 보고하고 승인을 득한 후 사업자 부담으로 변경 수행토록 한다.

6) 과업수행자는 다음의 주요 추진상항에 대하여 수시로 발주기관과 협의하고 그 의견에 따른다.

- 기본 계획에 따른 설계 및 변경

- 기타 발주기관에서 요청하는 사항

나. 과업수행자의 책임

1) 과업수행자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 모든 하자에 대하여 과업수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며 과업수행자는 사업 완료 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정·보완요구가 있을 때에는 과업수행자 부담으로 시정·조치하여야 한다.

2) 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

4) 공사중 현장의 안전에 관한 사항은 수급인이 관계법령(산업안전보건법 등)을 준수하여 현장안전관리를 하여야 하며, 산업재해가 발생되지 않도록 노력해야 한다. 현장관리자는 산업안전보건법 등 안전관계법령을 숙지하고, 이행하여야 하며, 미준수로 인한 산업재해 발생시 수급인이 이에 대한 모든 책임을 진다. 산업재해가 발생시 신속히 발주기관에 통보하여야 한다.

5) 수급인이 설계하여, 시공한 옥외광고물은 태풍 등 기상이변에 대해 붕괴의 위험이 없어야 하며, 설계 및 시공불량의 원인으로 추후 간판의 추락, 파손, 전기감전 등의 사고에 대해 책임을 진다.

다. 기술자 등의 교체

1) 과업수행자는 발주기관이 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 사업수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

2) 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간 동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

3) 과업수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주기관의 승인을 받아야 한다.

라. 특허권 등의 사용

1) 본 용역수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 특허권 등의 권리를 사용할 때에는 과업수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

마. 과업내용의 변경 및 설계변경 조건

1) 발주기관의 정책변경이나 과업지시서 예측내용과 달라지거나 기타 불가피한 사정이 발생할 경우 과업내용을 변경할 수 있다.

2) 과업내용 및 사업량의 변경이 발생될 시 또는 계약체결 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생할시 계약금액 내에서 정산한다.

바. 보안사항

1) 과업수행자는 용역내용에 대한 보안책임이 있으며, 참여기술자가 교체될 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

2) 본 용역과 관련된 자료 및 기록에 대하여 발주기관의 승인없이 타인에게 제공·대여 할 수 없으며 자료의 외부유출로 인한 사회적인 물의 또는 집단민원 야기 시 과업수행자는 민·형사상의 모든 책임을 져야한다.

사. 각종 보고

1) 과업수행자는 과업진행 및 세부내용 검토를 위해 발주기관의 요구가 있을 때에는 필요한 자료를 제출하고 착수, 중간보고를 하여야 하며 과업완료 15일전에 최종 보고를 하여야 한다.

아. 기타사항

1) 과업수행자는 지역주민의 벽화에 대한 이해도와 공공미술에 대한 관심도를 향상시킬 수 있는 방안을 모색하고 주민 참여 프로그램, 행사 등을 통해 주민들의 자율적 참여를 이끌어야 한다.

2) 본 과업으로 과업수행자가 제3자에게 피해를 주었을 경우, 과업수행자 책임하에 피해 당사자와 협의 보상하여야 한다.

3) 제반규정과 과업지시서 내용 중 미비한 사항이나 문구, 용어의 해석에 대한 의견을 달리하는 경우 발주기관의 해석과 지시를 따른다.

4) 본 과업의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한 일체를 발주기관의 소유로 한다.

Ⅲ		세부 지침

1. 디자인 개발 및 설계

1) 설계기간 : 착수일로부터 7일 (협상결과에 따라 변경 가능)

2) 최종 제안 디자인을 기준으로 하되 발주기관의 의견을 충분히 반영하여 설계하여야 한다.

※ 제출서류 : 설계서, 산출내역서 및 시방서, 기타 발주기관이 정한 도서

2. 시공 및 자재

1) 디자인 및 설계가 완료된 시방서, 도면, 내역서에 의거 발주기관의 지시에 따라 시공을 하여야 한다.

2) 제작·설치 시 보행자의 불편, 작업으로 인한 일체의 주민피해가 발생하지 않도록 하며 디자인 시행 곤란으로 비계 등의 시설물 설치 시 산업안전보건법 등 기타 법령이 정하는 바에 따라 안전하게 작업 시행하여야 한다.

3) 자재는 주변 환경에 친화적인 재질로 선정하여 발주기관과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 각종 시설물 제작 설치 중 사업비 증액이 없도록 하여야 하며, 만약 변경 사항이 발생 시 설계 및 시공 등에 관한 경비는 과업수행자가 부담한다.

3. 유지관리

1) 향후 유지관리 및 보수가 용이하도록 설계하여야 하며, 모든 시설물은 ２년 이내에 부식, 탈락되거나 퇴색될 경우 보수하여야 한다.
(단, 자연재해의 경우는 제외한다.)

2) 하자보수와 관련된 제반사항은『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』에서 정한 바에 따른다.

4. 계약기간의 연장

1) 다음의 각호에 해당하는 사유로 사업기간이 연장되어야 한다고 판단될 때에는 계약기간을 연장할 수 있다.

가) 천재지변 또는 이에 준하는 사항이 발생하였을 때

나) 기타 정당한 사유가 있다고 판단하였을 때

5. 저작권

1) 본 계약과 관련하여 개발된 저작물, 그림, 프로그램 및 기타 자료 등에 대한 저작권은 발주기관에 귀속되며 타 목적에 사용할 수 없다.

2) 과업수행자는 본 용역을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권, 특허권 등의 문제에 대하여 책임을 져야 한다.

6. 보안대책

1) 본 용역과 관련된 자료 및 기록에 대하여 발주기관의 승인없이 타인에게 제공・대여 할 수 없으며 자료의 외부유출로 인한 사회적인 물의 또는 집단민원 야기 시 과업수행자는 민・형사상의 모든 책임을 져야 한다.

2) 과업수행자는 용역내용에 대한 보안책임이 있으며, 참여기술자가 교체될 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

7. 기타사항

1) 본 과업 진행으로 인하여 과업수행자가 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업수행자가 그 피해를 부담하여야 한다.

2) 본 과업과 관련하여 과업수행자가 업무의 일부를 타 업체에게 하도급을 주고자 하는 경우에는 반드시 공공미술프리즘의 승인을 얻어야 한다.

3) 본 과업을 수행하기 위하여 제공된 모든 정보, 제출된 제안서 및 산출물은 공공미술프리즘에 귀속된다.

4) 계약자의 제안서 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 지닌다.

5) 발주기관은 필요 시 과업수행자에게 추가제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

6) 디자인 및 시공비는 총액을 원칙으로 하며 개발 난이도, 물가인상 및 수정보완 등의 요인에 따른 제작비 추가인상은 인정하지 않는다.

7) 과업수행자는 성과품 납품 후에도 발주기관의 수정 및 추가 보완요구가 있을 경우 또는 성과품 미비사항 발생 시 즉시 수정 보완 제출하되, 비용은 과업수행자 부담을 원칙으로 한다.

9) 과업수행과정에서 발생하는 제반 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 과업수행자가 부담한다.

Ⅳ		성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

2. 성과품의 납품

1) 과업수행자는 계약 완료일까지 발주기관의 최종확인을 거친 후 그 성과품을 납품하여야 하며, 성과품의 범위는 완성된 최종 성과물을 기준으로 작성하여야 한다.

2) 성과품의 범위

가) 완료보고서(시공 전, 후 사진 포함) 2부

- 필요시 준공검사 보완조치사항 포함.

나) USB(완료보고서 및 사진 수록)