2021 주택도시보증공사와 함께하는 사회공헌사업 -허그셰어하우스 6호점-  제안요청서

	2022. 09. 07.

	1.		사업개요

[추진배경]

서울 거주 1인 청년가구 3분의 1은 이른바 ‘지옥고(지하방·옥탑방·고시원)’에 거주하며, 한 장소에 거주하는 기간도 평균 1년 6개월에 불과하는 것으로 조사되며 청년 주거 문제는 사회적 문제로 대두되고 있음

연간 2~3천여명의‘자립준비청년’이 정부에서 1인당 지급하는 500만원을 가지고 보육원을 퇴소하지만, 턱없이 부족한 지원금으로 자립하는데 어려움을 겪고 있음

[추진목표 및 기대효과]

취약계층청년 및 보호종료아동의 주거복지 향상 및 취업역량 개발

사회적기업 지원을 통한 사회적경제 활성화 및 사회적 가치 창출

2.		용역추진개요

[용역개요]

용 역 명 : ‘허그셰어하우스 6호점’ 구축 및 운영

용역기간 : 계약체결일로부터 2년

기초금액 : 총 265,260,000원 (부가세 및 일체비용 포함)

- 세부내역 : 시설공사비(220,000,000원) + 입주민지원비(45,260,000원)

- 지급방법 : 세부내역별 분할 지급

※ 입주민 지원비는 재단과 내용협의 후 지원 예정

입찰 및 계약방법 : 일반경쟁, 직접입찰, 협상에 의한 계약

[용역범위]

(셰어하우스 구축) 주거 및 커뮤니티 공간 구축

- 내용 : 주거공간 및 공용공간 임대차계약, 내/외부 리모델링 공사, 건물 및 시설관리, 내부 집기 설치 등

예산 : 220,000,000원 (부가세 및 일체비용 포함)

일정 : 계약체결일로부터 1년 이내

(입주민 지원) 입주민 대상 지원 및 프로그램 진행

- 내용: 커뮤니티 프로그램, 역량강화 프로그램, 주거비용 지원

·커뮤니티 프로그램: 입주민 간 관계 형성을 통해 심리적 안정감을 제공하는 프로그램 진행 및 지원

·역량강화 프로그램: 입주민의 역량 강화를 위한 다양한 프로그램 진행 및 지원

·주거비용 지원: 주거취약계층 및 입주민 임대료 지원

예산 : 45,260,000원 (부가세 및 일체비용 포함)

·역량강화 프로그램 (8,100,000원)

·커뮤니티강화 프로그램 (2,000,000원)

·주거비용 지원 (35,160,000원)

일정 : 셰어하우스 완공일로부터 1년 이내

(성과보고) 사업 중간보고 및 결과보고

- 내용 : 셰어하우스 구축현황, 입주현황 및 프로그램 진행상황 보고

일정 : 상·하반기 반기별 보고 진행

	3.		추진일정

입찰공고 : 2022. 09. 07.(수) ~ 09. 18.(일)

입찰참가신청서 및 제안서 제출 : 2022. 09. 18.(일) 마감

제안서 발표 : 2022. 09. 22.(목) 예정 (※ 일정 추후 통보)

협상대상 통보 : 평가 후 3일 이내

제안내용 협상 : 협상개시 통보일로부터 3일 이내

계약 체결 : 협상 완료 후 7일 이내

용역 수행 : 계약체결 후 5일 이내 착수보고서 제출

용역 중간보고 제출 : 사업개시 6개월 이내 사업종료시까지 반기별, 중간보고서 제출

용역 결과보고 제출 : 사업종료 후 2주 이내 결과보고서 제출

※ 추진일정은 내부 사정으로 변동될 수 있음